2022년도

에너지협동조합 생태계 조성사업 공모신청서

에너지협동조합 생태계 조성사업

2022. 05. 04.

에너지협동조합 생태계 조성사업 계획서

Ⅰ. 현황

사 업 명

에너지협동조합 생태계 조성사업

사업기간

2022. 5. ~ 12.

사업예산

440,000천원

사업지역

경기도 북부, 남부, 동부권역

사업대상

- 경기도 시민참여형 에너지협동조합 및 사회적경제조직

- 경기도 내 지원사업으로 진행된 재생에너지 발전시설 2,000개 내외(20kW미만)

사업목적

경기도 내 에너지협동조합 자립 생태계 마련

설치된 재생에너지 발전시설의 일상점검 능력강화 및 발전량 확보

저탄소 사회 실현을 위한 데이터베이스 구축

사업목표

- 에너지전환활성화로 지역에너지 자립역량 강화

에너지전환 민간 네트워크 구축

협동조합 활성화로 기반 구축 및 신규 설립

전문기술 인력양성 교육으로 신재생에너지발전시설기능사 배출

- 소유자(관리자) 교육으로 사후관리 및 일상점검 능력 확보 및 안정적인 발전량 확보

- 태양광 유지관리 실태조사를 통한 정보 수집 및 추후 정책자료 활용

사업내용

사업분야	사업내용
생태계 조성	전문기술자 양성교육	에너지협동조합 기반구축 및 전문기술자 양성
	에너지협동조합 자립기반 마련	- 경기도 에너지협동조합 협의회 네트워크 강화 협동조합 활성화 및 자립기반 마련 공동세미나 및 정책제안
태양광 닥터	찾아가는교육	20kW 미만 소규모 발전소유자(관리자)에게 사후관리 및 유지보수와 관련된 자가진단 및 일반전기상식 등 기본교육, 재생에너지 관련 사업 정보 제공
	실태점검	태양광시설 방문 점검 및 실태 조사
	사후관리	발전시설 상태 점검 및 사후관리

사업일정

사업명	사업내용	5	6	7	8	9	10	11	12
생태계 조성사업	1. 전문인력 양성 교육
	2. 경기도시민발전협동조합협의회 네트워크 강화	상 시 진 행
	3. 신규 사업 발굴 및 사업 다각화
	4. 에너지협동조합 교류 및 운영지원	지역요청에 따라 상시진행
태양광 닥터	1. 사업진행 준비 및 구성
	3. 사업인력 선발 및 교육
	4. 소유자(관리자) 교육 및 실태 점검(모니터링, 정보수집)
	7. 사후관리 및 점검 데이터 수정보완
사업정리 및 정산

기대효과

에너지협동조합 자립기반 확보 및 사회적경제 분야 활성화

· 에너지협동조합 설립 및 운영 지원(전문인력 양성 등)

· 경기시민발전협동조합협의회 협력 강화

지역협동조합과 지역 주민들 간 신뢰 형성으로 시민참여 확대

협동조합 네트워크 내 공동 사업을 통한 생태계 조성에 기여

· 신규 사업 발굴 및 사업다각화

· 정책 개발 및 제안 활동

□ 사업개요

□ 사업배경 및 경기도 현황

□ 사업배경

- 기후위기로 에너지 전환과 재생에너지 확대가 중요해지고 있으며 녹색전환, 그린뉴딜,        탄소중립 등 다양한 정책과 활동 등이 공공분야를 비롯한 민간분야까지 강조되고 있음.

- 민간분야에서 시민이 참여하는 주체로 사회적경제분야 에너지협동조합활동이 경기도 내       여러 시군에서 활발히 활동하고 있으며 에너지협동조합은 재생에너지 확산뿐만 아니라       지역 내 재생에너지수용성을 높이는 역할을 하고 있음.

- 탄소중립기본법 제52조(협동조합 활성화) ① 정부는 신ㆍ재생에너지의 보급ㆍ확산 등 에너지 전환과 탄소중립 사회로의 이행 과정에서 발생하는 이익을 공정하고 공평하게 공유하기 위하여 「협동조합 기본법」 제2조 제1호 및 제3호에 따른 협동조합 및 사회적협동조합의 활동을 행정적ㆍ재정적ㆍ기술적으로 지원 할 수 있다.

- 경기도에너지기본조례 제23조(교육ㆍ홍보 및 민간단체지원) ② 도지사는 효율적인 에너       지 사용 및 신·재생에너지 보급·확대를 위해 사업을 추진하는 민간단체 등에 예산의 범       위에서 필요한 행정적·재정적 지원 등을 할 수 있다.

- 경기도 에너지기본조례 제26조(신ㆍ재생에너지시설 사후관리 등) ③ 도지사는 지방 보급       사업으로 보급한 신ㆍ재생에너지 설비에 대해 연 1회 이상 사후관리 등 실태조사를 실       시하여야 한다.

- 경기도 시민참여형 에너지전환지원조례』제12조(유지보수) ③ 도지사는 도가 추진한 에너지전환 사업의 운영현황을 제11조제4호에 따라 체계적으로 관리하고 필요한 경우 해당 에너지시설에 대한 유지보수를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

□ 경기도 에너지협동조합 생태계 조성 및 활성화

- 민간의 주도적인 에너지전환 활동으로 지역 에너지협동조합을 설립하였으며 공유부지 발굴 제공, 사회적경제 지원 등 정책적인 협력을 통해 협동조합 생태계를 조성해 갈 수 있음.

- 경기도 내 에너지협동조합 협의체인 ‘경기도시민발전협동조합협의회’가 구성되어 경기지역 에너지 사회적경제분야 활성화를 위한 네트워크 구축으로 공동사업개발 및 에너지 전환 관련 정책 및 제도 개선 활동을 지속하고 있음.

- 탄소중립, 재생에너지 생산에 참여 또는 희망하는 도민들에게 정보 및 상담 제공, 교육, 모니터링과 향후 재생에너지 관련 원스톱서비스를 제공하기 위한 협동조합 역량을 높이는 노력을 기울여 나가고 있음.

□ 경기도 재생에너지 발전시설(태양광) 현황 및 실태

- 건물지원이나 주택지원의 확대로 재생에너지 발전시설을 정기적으로 점검하고 유지하기 위한 실태조사의 필요성이 커지고 있음.

- 설치 이후 사후관리가 잘되지 않거나 A/S 기간이 지난 시설, 고장유무 확인 점검이 필

요하며 이를 지역 내 시민들의 생활과 밀접하게 활동할 수 있는 협동조합이 진행함으로서 향후 지역사회의 에너지 전환을 확산하고 에너지공동체 형성에 기여할 수 있음.

- 탄소중립의 사회로 가는 중요한 정보와 자원인 탄소배출권 관리와 축척에 관한 논의와 재생에너지 시설 설립 시부터 탄소배출권 관리방안을 정확하게 정립할 필요가 있음.

□ 태양광닥터 추진 활동 기반 :

· 경기시민발전협동조합협의회(경기지역내 29개 시민참여형 에너지협동조합 협의체)

· 경기에너지협동조합→경기도시민발전협동조합협의회→지역에너지협동조합→임직원 및

조합원

· 에너지협동조합 추진체(협동조합 미설립 지역 또는 취약 지역)

권역	조합명	권역	조합명
동부	성남시민햇빛발전사회적협동조합	남부	공동의집 에너지협동조합
동부	양평군에너지협동조합	남부	수원시민햇빛발전사회적협동조합
동부	여주참살이협동조합	남부	수원에너지협동조합
동부	용인에너지협동조합	남부	안성햇빛발전협동조합
동부	하남시민에너지협동조합	남부	오산시민햇빛발전사회적협동조합
서부	광명시민햇빛발전협동조합	남부	한살림햇빛발전협동조합
서부	김포시민에너지협동조합	남부	화성그린에너지협동조합
서부	대부도협동조합	남부	화성시민햇빛발전협동조합
서부	부천시민햇빛발전협동조합	북부	고양시민햇빛발전사회적협동조합
서부	시흥에너지협동조합	북부	구리시민햇빛발전협동조합
서부	안산시민햇빛발전협동조합	북부	남양주시민햇빛발전협동조합
서부	안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합	북부	동두천자연에너지협동조합
		북부	반딧불이에너지협동조합
		북부	수동자연에너지협동조합(추진중)
		북부	의정부자연에너지협동조합
		북부	파주해시민발전협동조합
		북부	화도자연에너지협동조합

Ⅱ. 사업 추진 계획

□ 사업의 필요성

- 최근 재생에너지에 대한 관심이 높아지면서 경기도민들을 중심으로 한 지역 에너지협동       조합이 설립되어 운영되고 있지만 지역마다 다른 여건과 환경으로 활성화에 어려움을        겪고 있음.

- 경기도민과 지역에너지 전환에 필요한 협동조합 간 상호 소통할 수 있는 여건을 마련하   여 재생에너지 생산 확대에 기여하고자 함.

- 지역 내 에너지협동조합이 있는 지역은 자립기반을 마련하고 현재 협동조합이 없는 지   역은 조합을 설립하여 지역에너지 전환 활동의 추진체로서 시민참여형 에너지 협동조합   을 중심으로 에너지전환 공동체를 형성할 필요가 있음.

- 태양광 발전시설을 점검하여 이상 유무 확인으로 발전시설 가동여부를 관리하고 에너지   컨설팅과 시설 점검으로 에너지전환 주민참여와 관심도를 높이고자 함.

- 가속화하는 기후위기 대응, 2050 탄소중립 사회 실현을 위한 지역 내 에너지전환 추진   체로서 역할을 다하도록 에너지협동조합 생태계 구축을 하고자 함.

□ 사업의 목표

- 지역 내 에너지전환 활성화로 지역에너지 자립역량 강화

경기도 내 에너지전환 민간네트워크 구축

지역 내 협동조합 활성화로 기반 구축 및 신규 설립

전문기술 인력양성 교육으로 신재생에너지발전설비기능사 배출

- 소유자(관리자) 교육으로 사후관리 및 일상점검능력 확보 및 안정적인 발전량 확보

탄소중립에 기여하는 사업다각화 논의로 새로운 사업 발굴

- 태양광 유지관리 실태조사를 통한 정보 수집 및 추후 정책자료 활용

□ 사업의 방향

- 에너지협동조합 일자리 창출 및 생태계 조성을 위한 자립기반마련

- 협동조합 네트워크 구성 및 활성화를 통한 지역에너지전환 확대

- 경기도 내 협동조합 활성화 및 미설립 지역 설립 추진

- 에너지협동조합 신규 사업 발굴

- 사용자 대상 교육으로 재생에너지 관련 수용성 상승 및 일상점검 능력 확보

- 재생에너지 시설점검을 통해 안정적인 재생에너지발전량 확보

- 지역에너지협동조합의 태양광발전 원스톱지원체계로의 역량 구축 :

다양한 정보와 사례 축적을 통한 재생에너지 생산에서 폐기까지 전과정 사업설계

- 기업과 마을, 사회적경제조직을 연결하는 네트워크 역량 강화와 탄소배출권 권리에    관한 협업 구상

□ 사업추진내용

□ 사업추진 진행도

□ 생태계조성사업

□ 태양광닥터

□ 사업내용

□ 생태계조성 사업

사업분야	사업내용		성과지표
생태계 조성	에너지협동조합 자립기반 마련 및 활성화	□ 전문인력양성교육 (신재생에너지발전설비기능사 자격취득 교육) - 경기도 에너지전환 전문 인력 양성으로 일자 리 창출 · 지역협동조합 임직원 및 조합원들 대상 으로 ‘신재생에너지발전설비기능사’ 자격취 득을 위한 맞춤형 교육 추진 · ‘신재생에너지발전설비’ 교육과 관련한 학 원이나 강사를 연계하여 시험 대비반 운영 - 생태계 조성 사업 및 협동조합 전문 인력 확 보 □ 경기도시민발전협동조합협의회 네트워크 강화 - 경기도시민발전협동조합협의회 운영 활성화 · 협동조합 대표/수행인력 간담회로 조합 간 네 트워크 강화 및 협동조합 확대 방안 모색 · 지역에너지 활동 확대 및 지역여건 조성 - 정책개발 및 제안 활동 · 에너지협동조합 정책개발 및 제안 · 세미나 및 포럼으로 의제 발굴 및 논의 · 탄소배출권 관리방안 논의 □ 신규사업 발굴 및 사업다각화 - 공공부지 발굴 및 재생에너지 신규사업 발굴 로 조합 자립능력 강화 - 재생에너지 생산체계를 위한 기업과 협업 - 총괄워크숍 : 점검 및 계획 □ 에너지협동조합 교류 및 운영지원 - 신규에너지협동조합 설립 지원 - 에너지협동조합 운영 및 실무지원 - 태양광발전 원스톱 지원체계 구축	- 신재생에너지발전설비 기능사 자격 취득 20명 - 협동조합설립 8개소 협동조합 확산 및 활동지원 10회 공공부지 발굴 컨설팅 60회 사업다각화 워크숍 1회 사업다각화 컨설팅 3회 경기도네트워크 대표 간담회 1회

□ 태양광닥터

사업분야	사업내용		성과지표
태양광 닥터	찾아가는 교육	□ 수행인력 역량강화교육 - ‘찾아가는 교육’ 수행 현장 컨설턴트 역량 강화교육 · 소양교육 : 기본 에너지 및 서비스교육 · 지역 내 자체교육 역량확보 - 기술인력 점검 실무교육 · 실제적인 점검실습으로 기술력확보 · 전문기술 활용 · 권역별 현장실습 교육으로 교육질 향상 안전교육(중대재해처벌법, 안전보건 교육) □ 소유자(관리자) 유지관리 및 에너지 교육 - 탄소중립·에너지전환 실현을 위한 정보 제공 및 자가 진단 일상 점검 능력 배양 (매뉴얼 제공) - 지역에너지협동조합 홍보 □ 내부인력교육(활동가, 기술자 교육) - 활동가 소양 교육 - 기술자 전문 교육(시설 운영현황 점검 및 안전교육)	컨설턴트·전문기술자 교육 1회(120명) 권역별 실무교육 1회 총 4회 - 경기북부, 남부, 동부권역 재생에너지발전시설 점검(2,000개소)
	실태점검	□ 태양광 발전 운전 상태 점검 및 안전 준수 - 안전확보 점검 및 안전장비 착용(메뉴얼화) - 정기점검으로 발전효율 향상 - 체계적인 데이터 확보로 정책 자료로 활용
	사후관리	□ 발전시설 상태 점검 및 사후관리 · 발전시설 사후관리 · 고장 및 폐기 관련 에너지공단 A/S센터연결
- 실무자 및 전문가 교육은 대면/비대면 혼합방식으로 진행 - 대면인원수 : 코로나19 단계에 따른 방역지침에 맞춰 진행 - 교육은 녹화가 가능할 시, 지역에서도 교육자료 활용할 수 있도록 제작 예정 - 방문인원의 경우 발열체크, 증상유무 확인 후 발전시설 방문 - 안전 확보 필수(사전 점검 및 사후 점검)

□ 세부추진계획

□ 생태계조성 분야

□ 전문인력양성교육(신재생에너지발전설비 기능사 취득 교육)

- 홍보: 경기시민발전협동조합협의회 주축 홍보(조합 임직원과 조합원, 경기도민에너지프로슈머

- 목표: 20명 기능사 자격획득(각 교육당 50명 미만 수강신청 가능)

- 내용: · ‘신재생에너지발전설비기능사 자격증’ 획득과정 운영

· 기능사 시험 3차~4차 시험 대비반 편성

· 자격획득을 위한 시험 실전대비반(필기, 실기)을 구성 운영

· 자격에 필요한 교육 학원 및 강사를 연계하여 교육 진행

· 31개 시·군 지역 참여를 위한 비대면 교육 중심으로 진행

· 교육동영상 제공과 멘토 교육 : 반복학습으로 이해력을 높임

· 철저한 출석관리로 합격률을 높임 :

수강생 참여율과 합격률 자료화 공유로 적극적 참여 유도 및 지역자료 활용

※ 시험일정표

※ 시험일정에 맞추어 커리큘럼 수립

□ 경기시민발전협동조합협의회 네트워크 강화

- 지역 에너지협동조합임직원 네트워킹 활성화: 월1회 운영위원회, 격월1회 대표자회의

- 연대 및 공동사업 개발 확대 : 공공부지 발굴 및 사업다각화를 위한 협력

- 경기시민발전협동조합협의회 운영 활성화를 통한 지역 상황공유

- 정책 개발 및 제안 활동(탄소중립 실현을 위한 에너지전환 체계 구축):

· 재생에너지 정책에 따른 조합 대응방안 및 의제 발굴

· 정부, 광역, 지자체 사업 제안 및 제도 개선 활동

- 생태계조성사업 참여인력 및 임직원 전체 간담회 및 워크숍 진행

□ 신규사업 발굴 및 사업다각화

- 신규 발전사업 공공부지 발굴

· 협의회 내 부지 발굴 관련 TF팀 구성 진행

· 권역별로 구성하여 지역조합의 주도적인 발굴 여건 조성

· 재생에너지 확대로 경기도 탄소중립에 기여

- 사업다각화 연구 및 활동 조직

· 재생에너지 분야 신규 사업 개발 및 연구

· 지역 내 마을 활동을 통하여 에너지전환 시민 참여율을 높이어 기업과 마을이 상생할  수 있는 새로운 사업을 구성해 PPA 거래, 가상발전소, 중계거래 등 재생에너지 100% 생산을 준비해 감.

· 에너지공단, 지역에너지협동조합, 전국시민발전이종협동조합연합회, 녹색전환연구소 협력으로 사업 진행

- 사업다각화 워크숍

· 탄소중립을 위한 신산업 진입을 위한 전국 및 경기도와 시군간의 연대 및 연계 활동

· 재생에너지 생산체계 구축을 위한 마을과 기업, 에너지협동조합의 협업을 이루어가는 신산업 발굴 및 추진

- 총괄워크숍

· 에너지협동조합 생태계 조성사업 참여 협동조합과 신규 협동조합 참여로 당해 사업    진행상황을 점검하고 객관적 시각으로 바라보는 논의를 통한 향후 추진방향 설정

· 궁극적으로 에너지협동조합 생태계 조성을 위한 네트워크가 나아갈 방향 및 지역 내   에너지전환 활성화를 위한 논의로 2030 계획 및 2023년 추진 활동 설계

· 마을, 기업, 에너지협동조합과 함께 이루어갈 2050 탄소중립 에너지전환 공동체 활동   방향성 제시

□ 에너지협동조합 교류 및 운영지원

- 협동조합 설립 지원

· 에너지협동조합 설립을 위한 컨설팅으로 전체과정 지원

· 설립 이후 운영의 내실화를 위한 실무 지원

- 협동조합 운영 활성화 지원

· 설립 후 초기 자립 기반을 만들기 위한 협동조합 활동 지원

· 협동조합의 다양한 활동 지원을 통해 지역 기반 마련

· 조합원 모집, 교육, 활동 지원 등 운영 활성화에 필요한 활동 지원

- 에너지협동조합 태양광발전 원스톱지원체계 구축

· 최초 설립부터 운영까지 한곳에서 해결하고 진행할 수 있는 체계 및 조직 마련

· 재생에너지 생산 시설 설립에서 폐기까지 관리할 수 있는 체계 및 조직 마련

□ 태양광닥터 분야

□ 사업진행 협력도

										경기도
										경기환경에너지진흥원
																													한국에너지공단 (신재생에너지설비 고장접수지원센터)
								수행인력 교육,										간담회 운영
			협동조합 컨소시엄												• • • • •					협동조합 컨소시엄
			생태계조성					태양광닥터												생태계조성							태양광닥터
			지원		동부			남부		북부										교육							서부
			협동조합 기반구축 / 협동조합 교류 및 운영 지원		광주			수원		고양										현장점검 인력 역량 강화 및 안전 교육							광명
					성남			안성		구리																	군포
					양평			오산		남양주																	김포
					여주			평택		연천																	부천
					용인			화성		의정부																	시흥
					이천					가평																	안산
					하남					동두천																	안양
										양주																	의왕
										파주																	과천
										포천
								생태계조성,태양광닥터,전문기술자 교육
	사후관리
	전용시스템 구축									(찾아가는 교육,								실태점검/사후관리)										고장접수						지원
																				(AS기간 만료설비 대상)
			주택							건물								사회복지시설											에너지자립마을
			태양광 닥터
			목표량 : 태양광 설비 시설 0000개 중 2,000개 교육 및 점검 찾아가는 교육+실태점검/사후관리 · 1단계 : 실무지원(방문일정 계획: 소유자(관리자)⇔활동가+기술자) · 2단계 : 활동가(찾아가는 교육) + 기술자(실태점검 및 사후관리) · 3단계 : 사무국(조사자료 데이터화)
																⇩ ⇧
			에너지협동조합 생태계 조성(31개 시·군 에너지전환 플랫폼 구축) 2050 탄소중립 실현 토대 마련

□ 추진단계 흐름도

사업계획 수립		수행조직 구성		수행인력 선발		수행인력 교육		사전유선 조사
사업계획수립 운영체계 마련		지역협동조합 지역대상분배 매뉴얼 제작		지역협동조합 활동가 전문가		경기도에너지정책 태양광원리 중대재해 및 안전교육		태양광설비 유무 방문일정체크
현장점검		실태조사 및 현장교육		설비점검		조사자료 테이터화		사업비정산
현장 방문 2인1조		소유자(관리자) 기본 교육 및 실태조사		현장점검표 작성 고장유무 확인		개인정보 동의 후 전력생산발전량 데이터확보		사업비정산

※ 실태점검 이상 발생 시 유지보수 관리 기간이 끝나지 않았을 경우 시공사 연결

※ 기한이 종료되었거나 시공사가 없을시 에너지 공단 고장 접수센터 연결

※ 에너지공단 고장접수지원센터(1588-0940)

※ 데이터 확보 후 추후 정보 활용

- 유지보수 및 점검방문을 통해 운영 여부 및 이상 사항 점검

- 지역을 기반으로 한 유지 및 위치 정보 데이터화

- 설치장소 및 설치 정보를 통한 다양한 정보 분석 및 태양광 발전관련 운영실태 확인 가능

- 발전소유자(관리자)가 쉽고 편하게 볼 수 있는 기본소양과 자가 점검 내용을 담은 매뉴얼 제작 및 배포

- 태양광닥터 수행인력 실무교육

· 대상 : 지역에너지협동조합 조합원 및 임직원 대상 활동가 및 기술자 교육

· 목표 : 찾아가는 교육 및 실태점검을 수행하기 위한 활동가 내부역량교육

· 내용 :

: 사업의 기본적인 이해 및 태양광에너지, 재생에너지 관련 정보교육

: 정부와 경기도의 에너지정책과 사업

: 시설 운영현황 점검/수행인력 전문화 교육

: 사용자(관리자)의 자가 검진 방법

: 테블릿 사용 및 점검 교육 강화(전체교육 이후 조합자체 교육)

: 중대재해 처벌법과 안전교육 :

: 점검인력 안전교육 : 낙상. 낙하 사고 예방법, 보호장비 착용 의무, 여름철 폭염 예           방법, 전기 감전사고 예방법, 점검 전 장비 점검 등(사전안전점검&사후안전점검)

: 에너지협동조합 관련하여 홍보 및 조합원 모집 활동

□ 방문 진행단계도

방문대상지 정보 확보		방문지 구분		사전조사		방문가구 확정		방문 일정 계획
지역별 방문 대상지 list-up		지역별 정보를 통해 방문구역설정		방문여부 및 운영관련 기초조사		사전조사결과로 방문가구 확정		방문 동선 및 일정 계획수립
현장점검		점검보고서 작성		사후관리
현장 방문 2인1조		점검관련 특이사항 기록		방문결과를 통해 추후 사후관리진행

※ 방문 2인 1조로 진행(기술자 1인, 활동가 1인)

※ 사전조사 시 방문여부 확인 후 방문실시 원칙

※ 지역 내 이동거리를 감안하여 구역을 구분하여 효과적 방문계획 수립

※ 방문가구 확정 후 방문계획을 수립하고 방문 후에는 방문 결과 보고

※ 방문대상 정보 입수 후 방문일정 수립을 위한 세부계획 논의

□ 사업추진 세부내용

- 태양광닥터 담당지역 분할

· 경기도는 31개 시군과 사업지역이 넓어 북부, 남부, 서부, 동부 4구역으로 분할

· 조합별로 구역을 설정하여 점검활동 진행

- 관할구역

· 경기에너지협동조합 : 북부, 남부, 동부권역

· 안산시민햇빛발전협동조합 : 서부권역

- 추진협동조합 사업역할

· 경기에너지협동조합 : 생태계조성관련 사업 전반 진행

경기 북부·남부·동부 권역 태양광닥터사업 진행

※ 사업진행 간 계속적인 업무협의와 협조로 각 지역에너지 협동조합이 자립할 수

있는 토대 마련

- 점검기술자·활동가 확보 방안

· 에너지협동조합 임직원 및 조합원, 지역별 에너지프로슈머 활용

· 2021년 진행에 함께했던 기술자 및 활동가 활용

기술자	활동가 및 실무지원	총 사업진행인원
43	100	143
(2021년 기술자 및 활동가 진행인원)

· 참여하는 인력에 대한 네트워크 및 보수교육 등 심화교육으로 에너지전환 관련 다양   한 활동을 연계하고 협동조합의 활동가로 폭을 넓혀감.

- 교육(안)

· 소유자(관리자) 에너지 교육

: 기후위기 대응 재생에너지로의 전환으로 탄소중립 실현 교육

: 태양광발전시설 일상 점검 및 재생에너지 관련 기본정보, 전기요금고지서 확인 교육          (매뉴얼 제공)

: 경기 및 지역 에너지협동조합 활동 홍보로 조합원 모집 및 홍보

· 사업참여내부인력교육(활동가, 기술자):

: 활동가 ‘찾아가는 교육’ 수행을 위한 소양 교육

: 시설 운영현황 점검/수행인력 전문화 교육

: 중대재해 처벌법 관련 교육 및 동영상 시청

: 점검인력 안전교육 : 낙상. 낙하 사고 예방법, 보호장비 착용 의무, 여름철 폭염 예방          법, 전기 감전사고 예방법, 점검 전 장비 점검 등(사전안전점검&사후안전점검 필수)

: 태블릿 사용 및 점검 교육 강화(전체교육 이후 조합자체 교육)

내부교육 세부내용

○ 기후위기, 재생에너지 전환으로 탄소중립 실현

○ 경기도·정부의 재생에너지 정책 현황과 과제

○ 협동조합과 함께하는 에너지전환 의미와 과제

○ 중대재해처벌법의 이해와 안전보건 관리체계

○ 태양광닥터 사업 흐름별 교육 및 프로그램 사용법

○ 현장실습

□ 실태점검

- 사업추진 세부내용 실태점검 데이터화

· 2019년, 2021년에 점검을 진행한 데이터 활용

· 재생에너지 발전시설 관련 이상 유무 확인 가능

- 실태점검 프로그램 추가 개발 및 태블릿PC 활용

· 2021년에 활용한 실태점검 프로그램을 추가 기술 보완

· 활동가 설문내용 입력 프로그램 추가 개발 및 성능이 개선된 태블릿PC 사용

· 일정 확인 및 방문 설정 추가 보완

- 기관 및 가정별 발전량 데이터 활용방안

· 설치일자와 누적발전량을 바탕으로 현재 발전된량을 계산할 수 있음. 이를 통하여 현재까지 저감시킨 탄소량 계산이 가능함.

· 가정별 데이터 구축을 통하여 전기요금 감면, 상계거래 등 전기요금과 관련한 가정 만족도 및 수요 관련 조사

- 지역에 따른 발전량 데이터 구축

· 설치한 지역에 따른 발전량 조사가능. 아울러 모듈 설치 위치 및 각도에 따른 발전량    도 비교할 수 있어 이를 바탕으로 효율적인 발전소 설치 가능

실태점검 리스트 내용

ㅇ 방문일정 확인(방문시간 및 요일 결정)

ㅇ 태양광시설 이전(이동), 고장 유무 확인

ㅇ 태양광설비 발전 유무 확인

ㅇ 소유자(관리자) 변동유무 확인

ㅇ 기타 요청사항

- 실태점검 리스트

□ 사업추진일정

사업명	사업내용	5	6	7	8	9	10	11	12
생태계 조성사업	1. 전문인력 양성 교육
	2. 경기도시민발전협동조합협의회 네트워크 강화
	3. 신규 사업 발굴 및 사업 다각화
	4. 에너지협동조합 교류 및 운영지원
태양광닥터	1. 사업진행 준비
	2. 사업 주체 및 진행 인력 구성
	3. 사업인력(활동가,기술자) 선발 및 교육
	4. 소유자(관리자) 교육 및 실태 점검
	5. 현장 지원 및 모니터링(주관사)
	6. 점검 결과 수집, 정리, 설문 조사
	7. 사후관리 및 점검 데이터 수정보완
사업정리 및 정산

Ⅲ. 유지관리 지역협력 네트워크 구축계획

□ 사회적경제 분야

□ 경기시민발전협동조합협의회

- 현재 경기도 내 시민발전협동조합을 중심으로 협의회가 구성되어 있음.

- 협의회를 중심으로 경기도 내 재생에너지 및 시민발전협동조합의 저변확대 및

활성화

- 협동조합설립지역 :

고양시, 광명시, 구리시, 군포시, 김포시, 남양주시, 동두천시, 부천시, 안산시,

안성시, 안양시, 오산시, 연천군, 의정부시, 수원시, 시흥시, 의왕시, 용인시, 양평군,

여주시, 파주시, 하남시, 화성시 총 24지역

(미설립 지역-가평, 과천, 양주, 이천, 포천, 광주, 평택)

□ 전국시민햇빛발전협동조합연합회

- 전국연합회 활동으로 재생에너지확산과 사회적경제 저변확대

- 조합간 연대활동을 통한 입법제안 활동 및 제도 개선 활동

- 협동조합 설립 및 운영 전문 자문 활동 진행

□ 안산시민햇빛발전협동조합

- 경기도 내 시공기술을 가지고 있는 협동조합

- 기술 자문 및 협동조합 사업과 관련하여 다각화 활동 논의

□ 각 지역협동조합 추진체

- 현재까지 협동조합이 설립되지 않은 지역에서는 추진그룹과 사업논의 진행.

- 초기 사업 진행에 있어 어려운 부분을 생태계조성사업으로 조합 홍보 및 초기

필요한 자금 활용 가능성이 높아져 활성화 예상

- 협동조합 미설립 지역 설립 추진(가평군, 과천시, 양주시, 이천시, 포천시)

□ 기술 및 정책분야

□ 에너지관리공단

- 유지보수 관련 정보 공유 및 제공

- 유지보수 및 고장서비스 센터 연계

□ 경기환경에너지진흥원

- 에너지협동조합 생태계조성사업 협력

- 경기도 내 에너지 관련 사항 점검 및 유지보수 관련 데이터 공유

□ 녹색전환연구소

- 신규 사업 발굴 및 에너지 정책연구

- 에너지 정책 관련한 자문 및 협력 진행

□ 각 시군 지자체(지방정부)

- 에너지사업관련 정보 공유 및 실태 파악 정보 공유

- 지자체별 재생에너지관련 지역협동조합과 협력

Ⅳ. 조직 및 예산운영계획

□ 조직 및 인력구성 계획

조직 및 인력구성 계획

□ 사업수행조직도

				사업총괄책임
				이사장		이상명
회계 부문				운영 부문				기술 부문
직위	성명			직위	성명			직위	성명
팀장	김선주			사무국장	정상숙			이사장	이상명
				주임	이수빈			조합원	박종석
				사원	김현지			조합원	김용호

□ 사업수행 인력현황(태양광닥터)

- 추가인력 계획 : 기능사 자격취득생 16명, 지역 조합원과 에너지프로슈머

권역	지역	협동조합명	참여분야	기술자	활동가
동부	성남	성남시민햇빛발전사회적협동조합	활동가
동부	양평	양평군에너지협동조합	활동가, 기술자
동부	여주	여주참살이협동조합	활동가
동부	용인	용인에너지협동조합	활동가, 기술자
동부	하남	하남시민에너지협동조합	활동가
서부	광명	광명시민햇빛발전협동조합	활동가, 기술자
서부	김포	김포시민에너지협동조합	활동가, 기술자

권역	지역	협동조합명	참여분야	기술자	활동가
서부	안산	대부도협동조합	활동가, 기술자
서부	부천	부천시민햇빛발전협동조합	활동가
서부	시흥	시흥에너지협동조합	활동가, 기술자
서부	안산	안산시민햇빛발전협동조합	활동가, 기술자
서부	안양군포의왕	안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합	활동가, 기술자
남부	수원	공동의집 에너지협동조합	활동가
남부	수원	수원시민햇빛발전사회적협동조합	활동가, 기술자
남부	수원	수원에너지협동조합	활동가, 기술자
남부	안성	안성시민햇빛발전협동조합	활동가
남부	오산	오산시민햇빛발전사회적협동조합	활동가
남부	한살림	한살림햇빛발전협동조합	활동가
남부	화성	화성그린에너지협동조합	활동가
남부	화성	화성시민햇빛발전협동조합	활동가, 기술자
북부	고양	고양시민햇빛발전사회적협동조합	활동가, 기술자
북부	구리	구리시민햇빛발전협동조합	활동가
북부	남양주	남양주시민햇빛발전협동조합	활동가, 기술자
북부	동주천	동두천자연에너지협동조합	활동가, 기술자
북부	연천	반딧불이에너지협동조합	활동가, 기술자
북부	남양주	수동자연에너지협동조합(추진중)
북부	의정부	의정부자연에너지협동조합	활동가, 기술자
북부	파주	파주해시민발전협동조합	활동가, 기술자

□ 예산운영계획

□ 일정별 세부추진 계획

(단위 : 천원)

일 정		주요내용	세부추진내용	사업비	비고
생태계 조성	5월~11월	전문인력 양성 교육	신재생에너지발전설비기능상 자격증 취득
	5월~12월	경기도시민발전협동조합협의회 네트워크 강화	-협동조합 활성화 -정책개발 및 제안
	6월~10월	신규 사업 발굴 및 사업 다각화	-공공부지 발굴 -사업다각화
	12월	총괄워크숍	-점검 및 계획
	5월~12월	에너지협동조합 교류 및 운영지원	-설립 및 운영 지원 -원스톱 체계 마련(지원, 사업)
태양광닥터	5월~6월	사업준비 (사업 주체 및 인력 구성)	-시민참여형 협동조합 홍보
	5월~7월	사업인력 교육	활동가, 기술자 교육
	7월~11월	소유자(관리자) 교육 및 실태점검	소유자(관리자) 방문 교육 및 발전량 실태점검
	7월~11월	현장지원 및 모니터링 (주관사)	권역별 점검 및 현장실습 지원
	7월~11월	점검 결과 수집, 정리, 설문 조사	태블릿PC활용 현장 자료
	11월~12월	사후관리 및 점검 데이터 수정보완	발전시설 상태점검 및 사후관리
	11월~12월	사업정리 및 정산

□ 예산편성계획(경기에너지)

(단위 : 천원)

항 목			산출내역		금액
합 계
1. 인건비 소계(총액의 22.4%)
1-1 인건비			○ 사업전담인력(총괄)
2. 운영비 소계(총액의 1.9%)
2-1 일반수용비			○ 사무용전자용품 대여 ○ 사무용품구입
2-2 여비			○ 지역출장
2-4 공공요금			○ 회계정산수수료 ○ 문자발송통신료 외 ○ 공공요금
3. 사업비 소계
생태계 조성 소계
생태계 조성	3-1 수당		○ 협동조합 교류(설립 및 지원) ○ 공공부지 발굴 협력단 ○ 사업다각화 및 총괄워크숍
	3-2 강사수당		○ 전문기술인력양성교육(신재생에너지기능사) ○ 사업다각화 및 총괄워크숍
	3-3 회의비		○ 협동조합 교류(설립 및 지원) ○ 공공부지 발굴 협력단 ○ 31개 시군 협동조합 대표 간담회
	3-4 임차료		○ 사업다각화 및 총괄워크숍
	3-5 인쇄비		○ 협동조합 교류(설립 및 지원)
	3-6 홍보비		○ 협동조합 교류(설립 및 지원) ○ 홍보(웹자보 등)
	3-9 워크샵		○ 사업다각화 및 총괄워크숍
태양광 닥터 소계
사업비 태양광닥터		3-1 수당		○ 현장/전문기술자 수당
		3-2 강사수당		○ 활동가 실무교육 및 현장실습 (전체교육-대면 또는 비대면, 4개 권역 현장교육 1회)
		3-3 회의비		○ 활동가 실무교육 및 현장실습 (전체교육-대면 또는 비대면, 4개 권역 현장교육 1회)
		3-5 인쇄비		○ 소책자(자가점검매뉴얼)
		3-6 홍보비
		3-8 물품비		○ 장비임대료
4. 위탁수수료 (총액의 1.9%)